Государственный контракт на выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог N	
0133200001725001732/393

г. Иваново "___"______ 20__ г.

Департамент  дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, являющийся государственным заказчиком Ивановской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице Первого заместителя директора Власова Ильи Евгеньевича, действующего на основании Положения о Департаменте, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 19.12.2014 № 562-п, приказа директора Департамента № 123 от 31.03.2025, распоряжения аппарата Правительства Ивановской области от 22.08.2025 № 457-к и Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест» (ООО «Стройтрест»),   именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Копытина Ильи Александровича   действующего на основании  Устава, именуемые  в дальнейшем Стороны в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ)  заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту автомобильных дорог (далее - объект) в сроки, предусмотренные Контрактом, с учетом Графика выполнения работ по ремонту объекта, который является неотъемлемой частью Контракта (Приложение 3 к настоящему Контракту), сдать результат работ по ремонту объекта Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в соответствии с п. 2.4 Контракта.
1.2. Подрядчик выполняет работы по адресу: путепровод через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области. (согласно Приложению № 1 к Контракту).
Объект закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.
Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.
1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со Сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Приложение 2 к настоящему Контракту).

1.4. Идентификационный код закупки 252372801282537020100100660014211244

2. Цена работ, порядок оплаты и условия
о казначейском сопровождении

2.1. Цена Контракта (цена работ) определяется Сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог (Приложение 2 к Контракту) и составляет: 148 489 999 рублей 00 копеек с учетом налога на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 процентов.
2.2. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных законодательством РФ, и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту. Цена Контракта включает расходы на приобретение материалов и устанавливаемого оборудования, необходимых для выполнения работ. В случае если сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.
2.3. Источник финансирования: Бюджет субъекта Российской Федерации (дорожный фонд Ивановской области). Код бюджетной классификации 
КБК 021 0409 123019Д002 244

2025 год – 4 848 153.09 рублей

КБК 021 0409 121И854470 244 (2554470Х204250000000)

2026 год –  143 641 845.91 рублей

2.4. Заказчик обязуется оплачивать результаты фактически выполненных по Контракту и принятых работ в размерах, установленных Контрактом, Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение 4 к настоящему Контракту) с учетом Графика выполнения работ по ремонту объекта, в срок не более семи рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного п. 5.6 Контракта.
Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от цены Контракта (цены этапа, если контрактом предусмотрены этапы), указанной в п.2.1. Контракта, в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Заказчиком счета на выплату аванса. Оплата выполненных работ производится с удержанием авансового платежа в размере 30% от предъявленной к оплате суммы, а с суммы последнего акта выполненных работ в объеме оставшейся части аванса.
 Выплата аванса осуществляется при наличии лимитов бюджетных обязательств и доведенных предельных объемов финансирования.
(Выплата аванса при исполнении Контракта, заключенного с участником закупки, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не допускается).
2.4.1. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ, предусмотренных Графиком выполнения работ по ремонту объекта, Заказчик вправе, при условии наличия необходимых средств по итогам перераспределения объемов финансирования с последующих периодов на более ранние, принять предъявленные Подрядчиком работы в установленном Контрактом порядке и оплатить выполненные работы в соответствии Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение 4 к настоящему Контракту). Цена Контракта (его этапов) и (или) отдельных видов работ при досрочном выполнении Подрядчиком работ по Контракту, их приемке и оплате Заказчиком изменению не подлежит.
2.5. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.
Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
2.6. Заказчик производит оплату на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату и подписанного сторонами акта приемки выполненной работы, предусмотренного п. 5.6 Контракта.
2.7. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.8. Казначейское сопровождение средств по Контракту осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

3. Гарантии качества работ

3.1. Качество выполненной работы должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным нормативными документами, а также требованиям, установленным Сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог.
3.2. Гарантия качества установлена на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.
Гарантийный срок составляет:
-  по верхнему слою покрытия - 5 лет;
- по нижнему слою покрытия – 5 лет.
- по нанесению горизонтальной разметки выполненной термопластиком – 1 (один) год.
- по земляному полотну – 6 лет.
- по искусственным дорожным сооружениям (путепровод) – 8 лет.
- по линиям наружного освещения – 3 года.
- по барьерному ограждению (металлические, железобетонные)– 5 лет.
- по дорожным знакам – 10 лет.
3.2.1. Течение гарантийных сроков начинается с даты подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС), по форме согласно Приложению N 2, или N 3, или N 4 к Типовым условиям контрактов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 N 572 (далее - документ о приемке работ), а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты, с которой в соответствии с законодательством РФ Контракт признается расторгнутым.
3.2.2. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Подрядчик несет ответственность в соответствии с п. 3.9 Контракта.
3.3. В случае если в период гарантийной эксплуатации объекта капитального строительства обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить в порядке и сроки, установленные Контрактом. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийных сроков, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
3.4. Если в течение гарантийных сроков будут выявлены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
Не позднее 10 календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием выявленных недостатков (дефектов) работ, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения (далее - акт). В случае уклонения Подрядчика от составления акта в установленный срок Заказчик вправе составить акт без участия Подрядчика.
Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Заказчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
3.5. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный актом срок Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) работ привлечь третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) работ.
3.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным.
3.7. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Контрактом срок либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
3.8. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ по Контракту, установлены гарантийные сроки на такое оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Контрактом, на такие материалы, конструкции, изделия и оборудование применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
3.9. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

4. Сроки и условия выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Контрактом, до 10.10.2026. Содержание и сроки завершения отдельных этапов работ определены Графиком выполнения работ по ремонту объекта (Приложение 3 к Контракту).
Срок исполнения контракта (отдельных этапов): с даты заключения Контракта до 20.11.2026 года 
4.2. Подрядчик обязуется привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 30% от цены Контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1466 "Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций".
4.3. В целях исполнения п. 4.2 Контракта Подрядчик обязуется:
4.3.1. Предоставить Заказчику в срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:
•	декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к СМП, СОНКО, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) СМП, СОНКО и заверенную печатью (при наличии);
•	копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
4.3.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя из числа СМП, СОНКО, предоставлять Заказчику документы, указанные в п. 4.3.1 Контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
4.3.3. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (их результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (результатов работы), оказанных услуг, отдельных этапов исполнения договора.
4.3.4. Представлять Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:
•	копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
•	копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом (в ином случае указанные документы представляются Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.3.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение требования о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа СМП, СОНКО, в том числе:
•	за представление с нарушением установленных сроков указанных в п. п. 4.3.1, 4.3.2 и 4.3.4 Контракта документов либо за недостоверность сведений, содержащихся в указанных представленных документах;
•	за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
4.3.6. Предоставлять в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с момента заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем, информацию Заказчику обо всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% цены Контракта.
4.3.7. В случае непредоставления в течение десяти дней Заказчику информации, указанной в п. 4.3.6, уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
4.4. Подрядчик обязуется соблюдать Правила ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 26.10.2020 N 1737.
4.5. Подрядчик обязуется предоставить необходимые материалы и оборудование для выполнения работы, за исключением поставляемых Заказчиком и указанных в Приложении N 1 к настоящему Контракту. Наименование, количество, стоимость материалов и оборудования указаны в Сметном расчете стоимости работ по ремонту автомобильных дорог.
4.6. Уборку и вывоз строительного мусора и иных накапливаемых в процессе выполнения работ отходов осуществляет Подрядчик.
4.7. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней после приемки Заказчиком результата работ освободить объект от принадлежащего ему оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов.
4.8. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик обязан вести общий журнал работ по форме, в которой отражается весь ход фактического производства работ, их технологическая последовательность, сроки, качество, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
4.9. Подрядчик также обязуется:
4.9.1. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять проверку хода и качества работ, выполняемых Подрядчиком.
4.9.2. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, о несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.9.3. Устранять нарушения, выявленные в соответствии с Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 N 1043 "О федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве", органом федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в указанный таким органом срок.
4.9.4. Выполнить до завершения ремонта объекта предусмотренные Сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и условиями Контракта пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства РФ в порядке и срок, установленные сторонами Контракта.
4.9.5. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах гарантийных сроков недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством РФ.
4.9.6. Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от Сметного расчета стоимости работ по ремонту автомобильных дорог.
4.10. Заказчик обязуется:
4.10.1. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных Заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта.
4.10.2. Для выполнения работ по Контракту в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, Сметный расчет стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, иные документы и имущество, необходимые для выполнения работ по Контракту, или обеспечить их передачу, а также осуществить иные юридически значимые действия, необходимые для выполнения работ по Контракту.
4.10.3. Нести ответственность:
а)	за соответствие нормам законодательства РФ Сметного расчета стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, наличие в Сметном расчете стоимости работ по ремонту автомобильных дорог ошибок, препятствующих исполнению Подрядчиком существенных условий Контракта, в случае если разработка Сметного расчета стоимости работ по ремонту автомобильных дорог осуществлялась Заказчиком;
б)	за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых Заказчиком на объект в соответствии с условиями Контракта;
в)	за несвоевременную передачу строительной площадки, Сметного расчета стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Контракту.
4.10.4. Поставить материалы, изделия, конструкции и оборудование согласно Приложению N 1 к настоящему Контракту.
4.11. Освидетельствование скрытых работ.
4.11.1. Результаты работ, скрываемые последующими работами (далее - скрытые работы), подлежат освидетельствованию сторонами. До проведения указанных контрольных мероприятий выполнение Подрядчиком последующих работ не допускается.
4.11.2. Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня уведомить Заказчика о готовности скрытых работ к проведению контрольных мероприятий.
4.11.3. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности скрытых работ, обязан в срок 2 (два) рабочих дней приступить к участию в освидетельствовании скрытых работ.
4.11.4. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием сторонами акта освидетельствования скрытых работ.
4.11.5. Если в ходе освидетельствования скрытых работ выявлены недостатки, соответствующая запись с указанием перечня недостатков и сроков их устранения вносится Заказчиком в общий журнал работ. Скрытие работ последующими работами допускается в этом случае только с письменного согласия Заказчика.
Подписание акта освидетельствования стороны осуществляют только после устранения выявленных недостатков.
4.11.6. В случае неявки надлежащим образом извещенного Заказчика для участия в освидетельствовании скрытых работ Подрядчик вправе составить односторонний акт. Скрытые работы в этом случае считаются освидетельствованными.
4.11.7. В случае скрытия Подрядчиком результатов работ последующими работами без уведомления Заказчика о готовности результатов работ либо без письменного согласия Заказчика, когда такое согласие предусмотрено Контрактом, Заказчик вправе потребовать вскрытия любой части скрытых работ для проведения освидетельствования, а также их последующего восстановления за счет Подрядчика.
4.12. Контроль за выполнением работы.
4.12.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.12.2. Данный контроль Заказчик вправе осуществлять в следующих формах:
•	посредством запроса у Подрядчика сведений и документов;
•	путем непосредственного осмотра и проверки выполняемой работы.
Подрядчик обязан отвечать на письменные запросы Заказчика о предоставлении сведений и документов в течение двух дней после получения запросов.
4.12.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, уведомив об этом Подрядчика в порядке, установленном Контрактом.
4.12.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков Заказчик обязан уведомить Подрядчика в течение 5 дней со дня его назначения в порядке, установленном Контрактом.
4.12.5. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ по Контракту в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
4.12.6. Заказчик вправе определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ по ремонту и (или) участвующих в приемке работ по ремонту.
4.13. Если при проведении осмотра и проверки выполняемой работы Заказчиком выявлены нарушения, стороны составляют и подписывают акт, в котором должны быть отражены эти нарушения.
4.14. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования и иного предоставленного Подрядчиком имущества несет Подрядчик.
4.15. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиком.
4.16. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.
4.17. Заказчик вправе в любое время потребовать от Подрядчика приостановить выполнение работ с указанием даты и причины такой приостановки при наличии объективных обстоятельств, которые грозят годности результатов работ, и (или) в случае невозможности осуществления дальнейшего финансирования работ по независящим от Заказчика причинам.
4.18. Заказчик обязан оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановки работы.
4.19. О необходимости возобновления работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление о возобновлении работ на объекте. Подрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Заказчиком в указанном уведомлении.
4.20. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
а)	непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
б)	возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
в)	иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность завершения работ в срок.

5. Приемка выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется в месте осуществления работ по адресу: путепровод через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском  районе Ивановской области. (согласно Приложению № 1 к Контракту).
5.2. Сроки, порядок, документальное оформление сдачи и приемки выполненных работ (этапов) установлены в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 827, с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 859 от 12.12.2011; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 N 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.10.2015 N 135.
5.3. Подтверждение соответствия дорожно-строительных материалов и изделий, использованных в ходе выполнения работ, осуществляется в соответствии с унифицированными процедурами, утвержденными Комиссией Таможенного союза, с учетом положений п. п. 24.1 - 24.19 ст. 5 ТР ТС "Безопасность автомобильных дорог", утвержденного Решением Комиссии ТС от 18.10.2011 N 827.
5.4. Приемка Заказчиком результата выполненных работ предусматривает предварительную (промежуточную) приемку результатов работ, выполненных Подрядчиком по каждому из отдельных этапов, указанных в Графике выполнения работ по ремонту объекта (Приложение 3 к Контракту), а также итоговую приемку результата всех работ по Контракту.
5.5. Промежуточный акт приемки выполненных работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику в день окончания выполнения работы.
Последний (итоговый) акт приемки выполненных работ Подрядчик оформляет и направляет Заказчику в течение трех рабочих дней после окончания выполнения последнего этапа работ.
5.6. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ (акта приемки выполненных работ), подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон Контракта в соответствии с положениями Федерального закона "Об электронной подписи", подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со Сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, условиями Контракта. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных Сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, формирует с использованием ЕИС документ о приемке работ (акт приемки выполненных работ), подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС.
Этот акт должен содержать:
•	идентификационный код закупки, наименование и место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работ, единицу измерения выполненной работы и единицу измерения поставленного товара, если при выполнении работ осуществлялась его поставка (указанные в Контракте);
•	информацию о Подрядчике. Если Контракт заключается с юридическим лицом, приводятся его полное и сокращенное (при наличии) наименование, ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), КПП, адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона. Если Контракт заключается с физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве ИП, указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН (аналог ИНН в установленных случаях), место жительства, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
•	наименование и информацию об объеме выполненной работы, а также указание количества и страны происхождения поставленного товара, если при выполнении работ осуществлялась его поставка;
•	стоимость исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу выполненный работы, а также цены за единицу поставленного товара, если при выполнении работ осуществлялась его поставка;
•	иную информацию с учетом требований, установленных Правительством РФ.
Подрядчик также размещает в ЕИС исполнительную документацию. К акту приемки выполненных работ могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. Если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации в акте приемки выполненных работ, приоритет имеет информация в акте приемки выполненных работ.
При принятии решения об отказе в приемке результатов выполненных работ Заказчик формирует с использованием ЕИС мотивированный отказ и подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.
При формировании документа о приемке работ или мотивированного отказа от приемки работ с использованием ЕИС, их размещении в ЕИС, обмене ими между Подрядчиком и Заказчиком с использованием ЕИС используются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые размещаются на официальном сайте ЕИС в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Федеральным казначейством.
5.7. Заказчик обязуется осуществлять приемку выполненной работы. В срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления акта приемки выполненных работ, Заказчик осуществляет одно из следующих действий:
а)	подписывает акт приемки выполненных работ усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС;
б)	формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ с указанием причин такого отказа.
5.8. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия в составе не менее пяти человек. В этом случае в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику акта приемки выполненных работ, осуществляются следующие действия:
5.8.1. Члены комиссии подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями:
а)	поступивший акт приемки выполненных работ;
б)	мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ, сформированный ими в ЕИС, с указанием причин такого отказа.
Если приемочная комиссия включает лиц, не являющихся работниками Заказчика, допускается подписать акт приемки выполненных работ, составить и подписать мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ без использования усиленных квалифицированных электронных подписей и функционала ЕИС.
5.8.2. После осуществления приемочной комиссией действий, указанных в п. 5.8.1 Контракта, Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ или мотивированный отказ от подписания акта приемки выполненных работ усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает его в ЕИС.
Если члены приемочной комиссии согласно п. 5.8.1 Контракта не использовали усиленные квалифицированные электронные подписи и функционал ЕИС, Заказчик вместе с актом приемки выполненных работ или мотивированным отказом от подписания акта приемки выполненных работ размещает в ЕИС подписанные комиссией документы в форме электронных образов бумажных документов.
5.9. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, в том числе Сметному расчету стоимости работ по ремонту автомобильных дорог, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения Контракта Заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
5.10. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
5.11. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работ информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работ.
5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
5.13. Подрядчик в случае получения мотивированного отказа от подписания акта приемки выполненных работ может устранить причины, указанные в таком отказе, и направить Заказчику акт приемки выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 5.6 Контракта.
5.14. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС акта приемки выполненных работ, подписанного Заказчиком.
5.15. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением о перераспределении объемов финансирования к Контракту принимает досрочно выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в соответствии с условиями Контракта и Графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение 4 к Контракту).

6. Обеспечение исполнения Контракта

6.1. Обязательства Подрядчика по Контракту обеспечиваются безотзывной независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика.
Способ обеспечения исполнения контракта Подрядчик определяет самостоятельно.
6.2. Сумма обеспечения: 15 314 079,00 руб., что составляет 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.
6.3. Контракт может быть заключен только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде независимой гарантии или внесения денежных средств на счет Заказчика.
6.4. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения исполнения Контракта она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
6.5. Если Подрядчиком в ходе проведения закупки предложена цена Контракта, которая на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в п. 6.2 Контракта, но не менее 10% от начальной (максимальной) цены Контракта.
6.6. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения к такому участнику не применяются.
6.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
6.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее - реестр контрактов).
6.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.
Предусмотренное п. 6.7 Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Контрактом, а также приемки Заказчиком выполненной работы (результатов работы).
Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии приемки заказчиком результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса либо в объеме, превышающем выплаченный аванс (если в соответствии с законодательством РФ расчеты по контракту в части выплаты аванса подлежат казначейскому сопровождению) (п. 20 Типовых условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 N 572).
6.10. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком избрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется:
6.10.1. Возвратить денежные средства в полном объеме Подрядчику не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания итогового акта о приемке выполненных работ.
6.10.2. Возвратить часть этих средств не позднее 30 (тридцати) дней с момента подписания промежуточного акта о приемке выполненных работ. При этом должны быть соблюдены условия, предусмотренные ч. 7.2 ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (если уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта).
6.10.3. Возвратить денежные средства не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта (в случае изменения способа обеспечения его исполнения в соответствии с п. 6.7 Контракта).
6.11. В случае если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в реестре контрактов.
6.12. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставления соответствующего обеспечения. За каждый день просрочки начисляются пени в порядке, предусмотренном п. 8.3.2 Контракта. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в соответствии с п. 6.7 Контракта.

7. Обеспечение гарантийных обязательств

7.1. Гарантийные обязательства по Контракту обеспечиваются безотзывной независимой гарантией или внесением денежных средств на счет Заказчика.
Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется в срок до подписания последнего (итогового) акта приемки выполненных работ.
Способ обеспечения гарантийных обязательств Подрядчик определяет самостоятельно.
Сумма обеспечения: 153 140,79 руб., что составляет 0,1 % от начальной (максимальной) цены Контракта.
7.2. В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств она должна соответствовать требованиям, установленным ст. ст. 45 и 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
7.3. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику новое обеспечение гарантийных обязательств взамен ранее предоставленного.
При предоставлении нового обеспечения гарантийных обязательств ранее предоставленная независимая гарантия не возвращается Заказчиком гаранту, предоставившему такую независимую гарантию, взыскание по ней не производится.
7.4. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств Подрядчиком внесены денежные средства, Заказчик возвращает их в полном объеме в следующие сроки:
•	не позднее 30 (тридцати) дней с момента окончания срока гарантийных обязательств;
•	не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств (при изменении способа обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с п. 7.3 Контракта).

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, а также условиями Контракта.
8.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств Заказчиком или Подрядчиком (в том числе требований к гарантии качества выполненных работ, а также требований к гарантийным срокам). Размер штрафа устанавливается Контрактом в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".
8.3. Взыскание неустойки с Подрядчика.
8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком контрактных обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства по Контракту начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически выполненных Подрядчиком.
8.3.3. В случае нарушения срока выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
8.3.4. В случае просрочки устранения недостатков выполненных работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1/300 действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от стоимости выполненных с недостатками работ за каждый день просрочки.
8.3.5. Если Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое имеет стоимостное выражение, размер штрафа составляет:
а)	10% цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
б)	5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
в)	1% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);
г)	0,5% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 100 млн до 500 млн руб. (включительно);
д)	0,4% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 500 млн до 1 млрд руб. (включительно);
е)	0,3% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 1 млрд до 2 млрд руб. (включительно);
ж)	0,25% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 2 млрд до 5 млрд руб. (включительно);
з)	0,2% цены Контракта, если цена Контракта составляет от 5 млрд до 10 млрд руб. (включительно);
и)	0,1% цены Контракта, если цена Контракта превышает 10 млрд руб.
8.3.6. Если Подрядчик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательство по Контракту, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии таких обязательств), размер штрафа составляет:
а)	1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;
б)	5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);
в)	10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн руб. до 100 млн руб. (включительно);
г)	100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.
8.3.7. За несоблюдение требований Контракта о привлечении субподрядчиков из числа СМП и СОНКО, в том числе за нарушения, указанные в п. 4.3.5 Контракта, устанавливается штраф в размере 5% от объема такого привлечения, указанного в п. 4.2 Контракта.
8.3.8. Общая сумма начисленного штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.
8.3.9. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные им работы.
8.3.10. Суммы в размере не исполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик удерживает из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
8.4. Взыскание неустойки с Заказчика.
8.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.4.2. Пени начисляются Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней устанавливается как 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от суммы, не уплаченной в срок.
8.4.3. В случае просрочки возврата денежных средств, предоставленных Подрядчиком в обеспечение исполнения своих обязательств по Контракту, он вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней, рассчитанных в соответствии с Контрактом.
8.4.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки их исполнения, Заказчик уплачивает:
а)	1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);
б)	5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);
в)	10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);
г)	100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.
8.4.5. Общая сумма начисленного штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту не может превышать цену Контракта.
8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.6. Стороны обязаны возместить друг другу убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.
8.7. При применении мер ответственности и совершении иных действий, связанных с нарушением условий Контракта, стороны обмениваются документами с использованием ЕИС, направляя электронные уведомления. Они формируются с помощью этой системы, подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица и размещаются в ЕИС без размещения на официальном сайте.
8.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику.

9. Расторжение и изменение условий Контракта

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта.
9.2. Как Заказчик, так и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также Контрактом.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных п. п. 4.12.3 и 4.12.4 Контракта.
В случае принятия решения одной из сторон Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта расторжение Контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
9.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.4. Заказчик формирует с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС.
9.5. Датой поступления Подрядчику решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения решения в ЕИС согласно п. 9.4 Контракта в соответствии с часовой зоной, в которой находится Подрядчик. Поступление данного решения считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненных работ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от Исполнения Контракта.
9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
9.9. При отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС согласно п. 9.4 Контракта, Заказчик не позднее одного дня, следующего за днем отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене указанного решения, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС.
9.10. Подрядчик формирует с использованием ЕИС решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС.
9.11. Датой поступления Заказчику решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта считается дата размещения решения в ЕИС согласно п. 9.10 Контракта в соответствии с часовой зоной, в которой находится Заказчик. Поступление данного решения считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.14. При отмене не вступившего в силу решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, размещенного в ЕИС согласно п. 9.10 Контракта, Подрядчик не позднее одного дня, следующего за днем отмены, формирует с использованием ЕИС извещение об отмене указанного решения, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в ЕИС.
9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.16. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.
9.17. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.18. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
9.19. В случаях, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, с целью изменения существенных условий Контракта:
а)	Подрядчик направляет Заказчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также подписанного проекта соглашения об изменении условий Контракта;
б)	Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Подрядчику либо подписанное соглашение об изменении условий Контракта и включает в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ информацию об изменении Контракта в реестр контрактов, либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

10. Разрешение споров

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров. Если стороны не урегулировали возникшие разногласия путем переговоров, применяется досудебный (претензионный) порядок разрешения споров.
10.2. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием ЕИС в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон Контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования ЕИС.
10.3. В претензии должны быть указаны:
а)	наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б)	наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в)	обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты РФ;
г)	требования стороны;
д)	информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е)	дата и регистрационный номер претензии;
ж)	подпись уполномоченного лица;
з)	перечень прилагаемых документов.
10.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
10.5. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
10.6. Сторона направляет в соответствии с п. 10.2 Контракта ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
10.7. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в арбитражный суд.
10.8. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, не урегулированные сторонами в досудебном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде Ивановской области.

11. Казначейское сопровождение

11.1.  Все расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению.
11.1.1. По Контракту осуществляется казначейское сопровождение целевых средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
11.2. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и правилами казначейского сопровождения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее - правила казначейского сопровождения).
11.3. Операции с целевыми средствами участников казначейского сопровождения осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством, на казначейском счете, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, и отражаются на аналитических разделах, открываемых в территориальном органе Федерального казначейства по Контракту.
Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участниками казначейского сопровождения утвержден приказом Федерального казначейства от 22 декабря 2021 года № 44н (далее – приказ ФК № 44н).
11.4. В рамках казначейского сопровождения Подрядчик обязан:
11.4.1. Открыть лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в территориальном органе Федерального казначейства. в соответствии с порядком, утвержденным приказом ФК №44н.
11.4.2. Представлять в органы Федерального казначейства документы, предусмотренные Порядком санкционирования операций (пп. 2 п. 2 ст. 242.23 БК РФ); (далее – порядок санкционирования).
11.4.3. Указывать идентификатор настоящего контракта в документах, связанных с его исполнением, в том числе в контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в целях исполнения настоящего контракта, а также в документах-основаниях и иных документах, предусмотренных утвержденным в соответствии с п. 4 ст. 242.23 БК РФ порядком санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения (пп. 3 п. 2 ст. 242.23 БК РФ, пп. "г" п. 10 Правил N 2024);.
11.4.4. Осуществлять ведение раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по контракту в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2021 N 210н (пп. 4 п. 2 ст. 242.23 БК РФ, пп. "д" п. 10 Правил N 2024).;
11.5. Средства, полученные в рамках исполнения настоящего контракта, запрещено перечислять с лицевого счета, предназначенного для проведения и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения (п. 3 ст. 242.23 БК РФ):
11.5.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Банка России или в кредитной организации;
11.5.2. В целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства РФ, законами субъектов РФ (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах РФ (муниципальных образованиях).
При наличии возможности размещения средств на депозитах и в иных финансовых инструментах указанные средства, а также средства, полученные от их размещения, должны быть возвращены на лицевой счет не позднее 25 декабря текущего финансового года (пп. "е" п. 10 Правил N 2024);
11.5.3. На счета, открытые в учреждении Банка России или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением случаев, перечисленных в пп. 3 п. 3 ст. 242.23 БК РФ;
11.5.4. На счета, открытые в учреждении Банка России или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры), за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, проведения строительного контроля уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему государственным учреждением в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
11.6. Целевые средства перечисляются на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Банка России или в кредитной организации при оплате обязательств, предусмотренных пп. 3 п. 3 ст. 242.23 БК РФ, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением настоящего контракта, в соответствии с Порядком санкционирования операций (пп. "ж" п. 10 Правил N 2024).

12. Заключительные положения

12.1. Контракт, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, считается заключенным в день его размещения в ЕИС.
12.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
12.3. Уведомления (в том числе обращения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку или направляются стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны Контракта, указанному в Контракте. Датой получения такого уведомления считается:
а)	дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны Контракта, лично под расписку);
б)	дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма, предусмотренного настоящим пунктом, либо дата получения стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в Контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом). Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
12.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
12.5. Перечень приложений к Контракту:
12.5.1. Техническое задание (Приложение №1)
12.5.2. Сметные расчеты стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений. (Приложение №2)
12.5.3. График строительно-монтажных работ (Приложение № 3)
12.5.4 График оплаты (Приложение № 4)
12.5.5 Отчет о привлеченных субподрядчиках из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. (Приложение № 5)
12.5.6 Регламент фотофиксации при выполнении дорожных работ. (Приложение № 6)

13. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик	Подрядчик	
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области 
Адрес местонахождения:
153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139.
Адрес для направления корреспонденции:
153013, г. Иваново, ул. Куконковых, 139.
Электронная почта: doroga@ivreg.ru
ИНН 3728012825
КПП 370201001
ЕКС 40102810645370000025  в  Отделении Иваново Банка России
БИК 012406500
Л/с 03332000830
УФК по Ивановской области г. Иваново
Номер счета получателя средств
(казначейский счет)
Единый казначейский счет: 03221643240000003300
Получатель (владелец казначейского счета): Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
	Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТРОЙТРЕСТ"
Место нахождения: 117519, Российская Федерация, ГОРОД МОСКВА, Ш. ВАРШАВСКОЕ,Д.    148, ОФИС 801
Почтовый адрес: 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 148, офис 801
Телефон: 74997554090
E-Mail:info@sttrest.ru
ИНН: 7724181844 КПП: 772601001
Банковские реквизиты: 
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Рас/с: 40702810938000019982
Кор/с: 30101810400000000225
Реквизиты для перечисления авансовых платежей (казначейское сопровождение): 
Получатель: УФК по г. Москве (ООО «СТРОЙТРЕСТ» л.с. 711Г3026001) 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва 
Р/с 03215643000000017301, БИК 004525988, 
К/с 40102810545370000003
Код СВР 450Г3026

	
ЗАКАЗЧИК: 
Первый заместитель директора Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта                                         
Ивановской области  

_____________/Власов И.Е. /
  М.П.                                                                                        	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «Стройтрест»
                                                          
  ________________/ Копытин И.А./
  М.П.                                                                                        		

Приложение № 1
 к Государственному контракту
№ 0133200001725001732/393  от___________2025г.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Объект закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе 
Ивановской области.
Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском  районе 
Ивановской области.
                                                                                                                   Таблица №1

Наименование работ	Начальная (максимальная) цена контракта,
в руб.	Объем работ	Срок (период) выполнения работ	
Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском  районе 
Ивановской области.

148 489 999,00	В соответствии с проектно-сметной документацией.
	С даты заключения контракта по 10.10.2026, в том числе по этапам:
1 этап с даты заключения контракта по 10.10.2025 г.
2 этап с даты заключения контракта по 10.10.2026	
1. Сметный расчет стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в отдельном файле.
В случае если в описании объекта закупки (техническом задании) и иных приложениях к контракту содержатся требования, касающиеся наличия определенной техники, оборудования, марок, информации 
о товарных знаках, знаках обслуживания, фирменных наименованиях, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, наименовании места происхождения товара или наименовании производителя, 
а также источников получения товаров (материалов), необходимо указывать эквивалент (аналог), а так же сопровождать такое указание словами «или эквивалент» профильным структурным подразделением.    

Таблица № 2
Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ по ремонту путепровода через железную дорогу 
на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе 
Ивановской области.

п. п.	Обозначение нормативного документа	Название нормативного документа	
1.		Федеральный закон от 29.12.2004 
№190-ФЗ 	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ
(ред. от 26.12.2024) (изм. и доп., вступ. в силу с 01.03,2025)
	
2.		ГОСТ 32756-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ	
3.		ГОСТ Р 8.568-2017	Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения	
4.		ГОСТ 12.0.003-2015	Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация	
5.		ГОСТ 12.1.010-76
(ред. от 10.02.1983)	 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования	
6.		ГОСТ 12.2.011-2012	Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 	
7.		ГОСТ 17.0.0.01-76
(ред. 01.08.1987)	Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения	
8.		ГОСТ17.2.1.01-76*
(СТ СЭВ 1366-78)
(ред. 01.02.1980)	Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу	
9.		ГОСТ 17.4.3.02-85
(СТ СЭВ 4471-84)	Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ	
10.		ГОСТ Р 59060-2020	Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Земли. Классификация нарушенных земель в целях рекультивации	
11.		ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению	
12.		ГОСТ 15467-79
(СТ СЭВ 3519-81)
(ред. 16.01.1985)	Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения	
13.		СП 78.13330.2012
(ред. 28.12.2023)	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85	
14.		СП 34.13330.2021
(ред. 27.12.2024)	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*	
15.		Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3
(ред. 15.11.2024)	Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	
16.		ГОСТ Р 58406.2-2020
(ред. 21.04.2022)	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия	
17.		ГОСТ Р 58406.4-2020	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем	
18.		ГОСТ Р 58406.1-2020. 
(ред. 21.04.2022)	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта 
от 15.05.2020 N 191-ст)	
19.		ГОСТ Р 58406.2-2020
(ред. 21.04.2022)	Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия	
20.		ГОСТ 32756-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ	
21.		ГОСТ 32731-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению строительного контроля	
22.		ГОСТ 32703-2014
(ред. 18.03.2025)	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования	
23.		ГОСТ 33029-2014
(ред. 1803.2025)	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического состава.	
24.		ГОСТ 33133-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования	
25.		ГОСТ 32730-2014
(ред. 18.03.2025)	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования	
26.		ГОСТ 32824-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические требования.	
27.		ГОСТ 32761-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования	
28.		ГОСТ Р 50597-2017	Национальный стандарт РФ. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля	
29.		ГОСТ 32757-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация	
30.		ГОСТ 32758-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения	
31.		ОДМ 218.3.031-2013	Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог	
32.		ОДМ 218.8.012-2019	Отраслевой дорожный методический документ. Методические рекомендации (указания) по прогнозной оценке воздействия на окружающую среду при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования	
33.		ОДМ 218.6.019-2016
(ред. 07.06.2023)	Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ	
34.		ГОСТ 33151-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения	
35.		ГОСТ 32961-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования	
36.		ГОСТ 32944-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования.	
37.		ГОСТ 26633-2015. 
(ред. 21.06.2023)	Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия"	
38.		ГОСТ 26134-2016	Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости" 	
39.		ГОСТ 27006-2019	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила подбора состава	
40.		ГОСТ 12730.0-2020	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости	
41.		ГОСТ 28570-2019	Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций	
42.		ОДН 218.3.039-2003	Укрепление обочин автомобильных дорог	
43.		ГОСТ 34329-2017	Опалубка. Общие технические условия	
44.		ГОСТ 31015-2002
(с изм. 15.05.2020)	Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия	
45.		ГОСТ 30413-96	Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием	
46.		ГОСТ 30416-2020	Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения	
47.		ГОСТ 20276.1-2020	Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод испытания штампом	
48.		ГОСТ 20276.2-2020	Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод испытания радиальным прессиометром	
49.		ГОСТ 20276.3-2020	Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов	
50.		ГОСТ 20276.4-2020	Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод среза целиков грунта	
51.		ГОСТ 20276.5-2020	Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод вращательного среза	
52.		ГОСТ 20276.6-2020	Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод испытания лопастным прессиометром	
53.		ГОСТ 20522-2012
(ред. 27.12.2022)	Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний	
54.		ГОСТ 12730.0-2020	Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости	
55.		ГОСТ 13015-2012
(ред. 28.12.2023)	Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения	
56.		ГОСТ 30515-2013
(ред. 18.05.2021)	Межгосударственный стандарт. Цементы. Общие технические условия	
57.		 ГОСТ Р 52289-2019	Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств	
58.		ГОСТ Р52129-2003
	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия	
59.		СП 78.13330.2012
(ред. 28.12.2023)	Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85	
60.		СП 48.13330.2019
(ред. 21.04.2025)	Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004	
61.		ГОСТ Р 52290-2004
(ред. 20.12.2019)	Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования	
62.		ГОСТ 24640-91
(СТ СЭВ 6824-89)	Добавки для цементов. Классификация	
63.		ГОСТ Р 58401.12-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения динамического модуля упругости с использованием установки динамического нагружения (SPT)	
64.		ГОСТ Р 58401.25-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения сдвиговой деформации (SST)	
65.		ГОСТ Р 58401.21-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения динамического модуля упругости и числа текучести с использованием установки динамического нагружения (AMPT)	
66.		ГОСТ Р 58401.3-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила проектирования	
67.		ГОСТ Р 58401.1-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования	
68.		ГОСТ Р 58401.18-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения водостойкости и адгезионных свойств	
69.		ГОСТ Р 58406.8-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение сопротивления пластическому течению по методу Маршалла	
70.		ГОСТ Р 58406.9-2019
(ред. 21.04.2022)	 Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод приготовления образцов уплотнителем Маршалла	
71.		ГОСТ Р 58401.8-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения содержания воздушных пустот	
72.		ГОСТ Р 58401.19-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом экстрагирования	
73.		ГОСТ Р 58401.15-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Определение содержания битумного вяжущего методом выжигания	
74.		ГОСТ Р 58401.16-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы определения максимальной плотности	
75.		ГОСТ Р 58401.9-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Методы сокращения проб	
76.		ГОСТ Р 58401.6-2019	Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения степени обволакивания зерен заполнителя битумным вяжущим	
77.		ГОСТ 32953-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования	
78.		ГОСТ 32830-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования	
79.		ГОСТ Р 57144-2016
	Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. Общие технические требования	
80.		ПУЭ	Правила устройства электроустановок (в действующей редакции). 	
81.		ГОСТ 23735-2014	Межгосударственный стандарт. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия	
82.		ГОСТ 32945-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования	
83.		ГОСТ 32948-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования	
84.		ГОСТ 32866-2014	Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования	
85.		ГОСТ Р 59120-2021	Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования.	
 
*Примечание: В случае, если в данном техническом задании имеется ссылка на устаревшие нормативные документы, то при выполнении работ следует руководствоваться государственными стандартами, действующими на настоящий момент. 

Таблица № 3
Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя 
в Шуйском  районе Ивановской области.
	
№	Наименование объекта 	Адрес участка	
1	Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу 
на км 8 автомобильной дороги Обход 
г. Шуя в Шуйском  районе 
Ивановской области.
	Путепровод через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя 
в Шуйском  районе Ивановской области.
	
Адресный участок

Гарантийные обязательства

Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу 
на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе
 Ивановской области.

-  по верхнему слою покрытия - 5 лет;
- по нижнему слою покрытия – 5 лет.
- по нанесению горизонтальной разметки выполненной термопластиком – 1 (один) год.
- по земляному полотну – 6 лет.
- по искусственным дорожным сооружениям (путепровод) – 8 лет.
- по линиям наружного освещения – 3 года.
- по барьерному ограждению (металлические, железобетонные)– 5 лет.
- по дорожным знакам – 10 лет.

ЗАКАЗЧИК: 
Первый заместитель директора Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта                                         
Ивановской области  

_____________/Власов И.Е. /
  М.П.                                                                                        	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «Стройтрест»
                                                          
  ________________/ Копытин И.А./
  М.П.                                                                                        		

Приложение № 2
 к Государственному контракту
№ 0133200001725001732/393  от___________2025г.

Сметные расчеты стоимости работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, проектная документация 
(Прилагается в отдельном файле)

Приложение № 3
 к Государственному контракту
№ 0133200001725001732/393  от___________2025г

Заказчик: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области 
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест»
                 Объект закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.
                 Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.

График строительно-монтажных работ

Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход 
г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.	
Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) части вида работ, отдельного вида работ	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Ед. изм	Физический объём работ	Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии	Приме-чание	
							
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.	с даты заключения контракта по 10.10.2025	Усл. Ед.	0,03264969444	не предусмотрено		
2	Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.	с даты заключения контракта по 10.10.2026	Усл. Ед.	0,96735030556	не предусмотрено		

ЗАКАЗЧИК: 
Первый заместитель директора Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта                                         
Ивановской области  

_____________/Власов И.Е. /
  М.П.                                                                                        	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «Стройтрест»
                                                          
  ________________/ Копытин И.А./
  М.П.                                                                                        		

Приложение № 4
 к Государственному контракту
№ 0133200001725001732/393  от___________2025г

Заказчик: Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области 
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Стройтрест»
                 Объект закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.
Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход 
г. Шуя в Шуйском районе Ивановской области.

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или)части вида работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате, руб.*	Сроки оплаты этапа выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ	Доля выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части вида работ отдельного вида работ в цене Контракта, %	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя 
в Шуйском районе 
Ивановской области.
	в течение 30 дней с даты получения счета на выплату аванса	30%	1 454 445,93	-	-	
		-	-	3 393 707,16	Не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке усиленной квалифицированной подписью, лица имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта)	0,03	
2	-	в течение 30 дней с даты получения счета на выплату аванса	30%	43 092 553,77	-	-	
2	Выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на км 8 автомобильной дороги Обход г. Шуя 
в Шуйском районе
Ивановской области.
	-	-	100 549 292,14	Не более 7 рабочих дней с даты подписания документа о приёмке усиленной квалифицированной подписью, лица имеющего право действовать от имени Заказчика (куратора контракта)	0,97	

ЗАКАЗЧИК: 
Первый заместитель директора Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта                                         
Ивановской области  

_____________/Власов И.Е. /
  М.П.                                                                                        	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «Стройтрест»
                                                          
  ________________/ Копытин И.А./
  М.П.                                                                                        		

Приложение № 5
 к Государственному контракту
№ 0133200001725001732/393  от___________2025г

Отчет о привлеченных субподрядчиках
 из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций***	
												
Информация о Контракте с Подрядчиком*	Информация о договоре с субподрядчиком**	Процент от суммы Контракта Подрядчика, 
%	
Наименование организации	Предмет Контракта	№ Контракта	Дата заключения Контракта	Дата исполнения Контракта	Сумма по Контракту, руб	Наименование организации	Предмет договора, 
№ договора	Дата заключения договора	Дата исполнения 
договора	Сумма по договору, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

						 	 	 	 	 	 	
Итого:	 	 	
									
*Подрядчик-лицо, заключившее Контракт с Заказчиком
**Субподрядчик-лицо, заключившее Контракт с Подрядчиком
***К Отчету  прилагаются документы о заключенных контрактах/договорах с субподрядчиками из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций а также документы, подтверждающие оказание услуг , выполнение работ по таким контрактам/договорам, а именно: копия контракта/договора, копия свидетельства о регистрации юридического лица, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копия документа, подтверждающая полномочия лица, подписавшего указанные контракты/договора, копии документов, подтверждающих отнесение юридического лица к субъектам малого предпринимательства и (или) социально ориентированными некоммерческими организациями и т.д.	
ЗАКАЗЧИК: 
Первый заместитель директора Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта                                         
Ивановской области  

_____________/Власов И.Е. /
  М.П.                                                                                        	ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ООО «Стройтрест»
                                                          
  ________________/ Копытин И.А./
  М.П.                                                                                        		

Приложение № 6
 к Государственному контракту
№0133200001725001732/393от___________2025г

РЕГЛАМЕНТ ФОТОФИКСАЦИИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ

Понятия и определения
1.1.   Фотофиксация – процесс создания цифровых фотоизображений (снимков).
1.2. Фотоизображение (снимок) – получение и сохранение изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотоаппарате.
Набор фотоизображений (снимков) – комплект фотоизображений (снимков), содержащий дополнительную информацию.
Материалы фотофиксации – систематизированные и упорядоченные наборы фотоизображений (снимков), содержащие дополнительную информацию.
Участок дороги – ремонтируемая часть дороги с указанием названия дороги, а также начала и конца проведения работ.

Общие положения
Обязанность по осуществлению фотофиксации возлагается на Подрядчика. Фотофиксации подлежат все виды работ, в том числе и скрытые работы.
Фотофиксация работ осуществляется представителем Подрядчика по мере выполнения ремонтных работ с использованием фотоаппарата или иного устройства, позволяющего сделать цветные фотоизображения (снимки), которые подробно отражают характерные параметры объекта и факт (результат) выполнения соответствующих работ.
Требования к фотофиксации
Формат фотоизображения (снимка) должен быть: *.jpeg, *.pdf, *.tiff, соотношение сторон 4:3 или 16:9, цветное изображение, разрешение (размер изображения в пикселах) не менее 1920*1080, без использования цифрового увеличения (зума). 
Масштаб фотоизображения (снимка) должен быть выбран таким образом, чтобы возможно было подробно просмотреть характерные параметры, подтверждающие объем и (или) качество выполненных работ, а также используемые при выполнении работ материалы.
Количество наборов фотоизображений на 1 полный километр – 2 набора, на 1 неполный километр – 1 набор. 
Фотофиксацию необходимо осуществлять на объектах вне салона транспортного средства, а также вне зданий и сооружений.
Лицо, осуществившее фотофиксацию, обязано оценить качество сделанного фотоизображения (снимка). В случае некачественной съемки, данное лицо должно произвести повторную съемку с изменением параметров фотоаппарата, применением дополнительного освещения, изменением ракурса или масштаба съемки и прочее.
При фотофиксации должна быть идентифицирована окружающая обстановка фотографируемой точки с наличием видимых ориентиров, привязка к местности (дорожные знаки, здания и иные постройки, остановочные пункты, барьерное ограждение, километровые столбы, труб, автобусных остановок и других элементов).
Оформление материалов фотофиксации
Все фотоизображения (снимки) систематизируются и упорядочиваются Подрядчиком путем формирования наборов фотоизображений (снимков) с указанием дополнительной информации, на основании наборов фотоизображений (снимков) формируются материалы фотофиксации с указанием дополнительной информации, в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.
Поле с дополнительной информацией должно занимать не более 20 (двадцати) процентов от общей площади страницы, на которой представляется фотоизображение. 
4.2.  На странице, содержащей фотоизображение (снимок), должно быть поле с дополнительной информацией, в котором указывается:
1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);
2) полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);
3) номер и дата Контракта;
4) дата и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 
5) пикетное положение выполненных работ.
6) наименование вида работ.
Подписи п.1-п.6 осуществляются под снимком. 
Набор фотоизображений (снимков) должен содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:
 порядковый номер набора (сквозная нумерация);
 полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);
номер и дата Контракта (субподрядного договора);
название объекта, с указанием начала и конца участка (км +); 
Подписи п.1-п.4 осуществляются на титульной странице набора фотоизображений (снимков). 
Материалы фотофиксации должны содержать поле с дополнительной информацией, в котором указывается:
полное наименование подрядной организации (субподрядной организации при необходимости);
номер и дата Контракта;
Подписи п.1-п.2 осуществляются на титульной странице материалов фотофиксации к соответствующему объекту.
Подрядчик обязан представить материалы фотофиксации Заказчику в распечатанном виде и на электронном носителе, в формате либо Microsoft Power Point, либо Microsoft Word,  изображение должно быть цветным, формата не менее 50% от «А4».
Размер 1 (одного) файла в электронном виде не должен превышать 50 Мб.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней, со дня следующего за днем получения материалов фотофиксации, рассматривает полученные материалы фотофиксации на предмет возможности применения их в качестве подтверждения выполненных работ. В случае, если Заказчик принял решение, что материалы фотофиксации являются некачественными, в течение 2 (двух) рабочих дней уведомляет Подрядчика о необходимости устранения выявленных замечаний. Подрядчик в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня уведомления Заказчиком обязан устранить выявленные замечания и повторно представить исправленные материалы фотофиксации Заказчику. В случае, если подрядчик в установленный срок не представляет исправленные материалы фотофиксации, обязанность по их представлению считается не исполненной Подрядчиком.
Требования к хранению и использованию документов
Материалы фотофиксации хранятся Заказчиком в течение 5 (пяти) лет.
Материалы фотофиксации по письменному запросу контрольных органов Ивановской области выдаются Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней в электронном или бумажном виде. 

1 этап
Подготовка наборов фотоизображений	

Фотоизображение

1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);
2) полное наименование подрядной организации;
3) номер и дату Контракта;
4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 
5) пикетное положение выполненных работ.
6) наименование вида работ.

Фотоизображение

1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);
2) полное наименование подрядной организации;
3) номер и дату Контракта;
4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 
5) пикетное положение выполненных работ.
6) наименование вида работ.

Набор фотоизображений № п/п

порядковый номер набора (сквозная нумерация);

полное наименование подрядной организации; 

номер и дата Контракта;

название объекта, с указанием начала и конца участка (км +); 

Фотоизображение

1) порядковый номер фотоизображения (сквозная нумерация);
2) полное наименование подрядной организации;
3) номер и дату Контракта;
4) дату и время, когда было сделано фотоизображение (снимок); 
5) пикетное положение выполненных работ.
6) наименование вида работ.

		
2 этап
Подготовка материалов фотофиксации	
Набор фотоизображений № п/п

порядковый номер набора (сквозная нумерация);

полное наименование подрядной организации;

номер и дата Контракта;

название объекта, с указанием начала и конца участка (км +); 

Материалы фотофиксации

Наименование подрядчика
№ и дата Контракта

Набор фотоизображений № 1

Порядковый номер набора
Наименование подрядчика
№ и дата контракта
дата и время
Участок дороги 
наименование вида работ

Набор фотоизображений № 2Наименование подрядчика
№ и дата контракта
ядчика
№ и дата контракта
дата и время
Участок дороги 
наименование вида работ

Набор фотоизображений № п/п

порядковый номер набора (сквозная нумерация);

полное наименование подрядной организации;

номер и дата Контракта;

название объекта, с указанием начала и конца участка (км +);